ORDENANZA N° 1774/05
El Concejo Deliberante de Capilla del Monte, SANCIONA CON FUERZA DE
O R D E N A N Z A 

Art. 1°.-:LLAMASE a Licitación Pública, en fecha a determinar por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante Decreto, la que estar  sujeta a la recepción del crédito tramitado por la Municipalidad ante el ENOHSA, para la construcción de la obra: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CAPILLA DEL MONTE, que comprende la construcción de una cañería de aducción de agua desde el caño de toma existente en el Dique El Cajón hasta el predio del tanque elevado de Barrio El Zapato, incluyendo la instalación de una estación de bombeo con sus correspondientes múltiples de aspiración y de impulsión, la construcción de una planta potabilizadora de agua y la construcción de un tramo de cañería de nexo de 0,300 m. de di metro, en un todo de acuerdo a lo indicado en el Pliego de condiciones particulares que obra agregado a la presente Ordenanza.-

Art. 2°.-:PUBLIQUESE el presente llamado durante 5 (cinco) días consecutivos en el Boletín Oficial de la Provincia, y 5 (cinco) días en un medio de circulación provincial.-

Art. 3°.-:FIJASE el valor del Pliego de Condiciones en la suma de $ 800 (ochocientos pesos).-

Art. 4°.-:COMUNIQUESE, córrase vista al Tribunal de Cuentas, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Capilla del Monte, a los 30 días del mes de diciembre de 2004.-

firmado:   BEATRIZ WARTSKI         MARIA TERESA CASTELLA
              SEC.C.D.               VICEPTE. 1° C.D.

DECRETO N° 005/05-PROMULGASE la Ordenanza N° 1774/05 sancionada por el Concejo Deliberante con fecha 30 de diciembre de 2004.-
Capilla del Monte, 4 de enero de 2005.-
firmado: 
LUIS A. BRUNA   OSCAR AMANTE   CARLOS GUSTAVO DE FIGUEREDO
PTE. EMOSS    SEC.DE GOB.Y PROD. INTENDENTE MUNICIPAL 

 

OBRA:  AMPLIACION  DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD: CAPILLA DEL MONTE
DEPARTAMENTO:  PUNILLA
PROVINCIA:  CORDOBA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Artículo 1 -  INTRODUCCION

La presente obra comprende la construcción de una cañería de aducción de agua desde el caño de toma existente en el Dique El Cajón hasta el predio del tanque elevado de Barrio El Zapato, incluyendo la instalación de una estación de bombeo con sus correspondientes múltiples de aspiración y de impulsión, la construcción de una planta potabilizadora de agua y la construcción de un tramo de cañería de nexo de 0,300 m de di metro, en un todo de acuerdo a lo indicado en la documentación de proyecto.  

Artículo 2 -  OBJETO DE LA CONTRATACION

Los trabajos a realizar en virtud del contrato que se celebra para la ejecución de las obras del presente proyecto, serán:

- La elaboración de los planos constructivos de la obra y las memorias correspondientes (Ingeniería de Detalle), que deber n ser aprobados por el Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento. Estos trabajos deberán ser presentados con 15 (quince) días corridos de anticipación, como mínimo, con respecto a la iniciación de cada una de las partes de la obra.

- La construcción de la obra de acuerdo a la documentación de proyecto. 

- Las gestiones de permisos ante los organismos provinciales o nacionales y el pago de los derechos pertinentes que correspondieren.

- La conservación de las obras durante la ejecución de los trabajos y durante el período comprendido entre la Recepción Provisional y la Definitiva.

- Elaboración de la totalidad de los planos conforme a las Obras ejecutadas.

Todos los costos que estas tareas demanden serán prorrateados en los diferentes ítems del presupuesto de la obra.

Artículo 3 -  CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION

Las obras se contratarán y ejecutarán de acuerdo a las normas del presente Pliego, el de Condiciones Generales y los de Especificaciones Técnicas General y Particular, siendo su contratación mediante un llamado a Licitación Pública.

Artículo 4 -  DOMICILIO LEGAL DEL OFERENTE

El Oferente deberá fijar domicilio legal en la localidad de Capilla del Monte a todos los efectos que hubiere lugar, indicando número de teléfono y correo electrónico.

Artículo 5 -  PRESUPUESTO 

El monto de la contratación de la obra asciende a la suma de: PESOS   OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS  ($ 861.797,62), Incluido I.V.A.

Artículo 6 -  CATEGORIA DE LA OBRA

A los fines del cumplimiento del Decreto Ley 1332 y sus Decretos reglamentarios se clasifica a la presente obra como de 1o Categoría en Ingeniería.

Artículo 7 -  ESPECIALIDAD DE LA OBRA

Además de la total aplicación del Decreto Provincial No 809/1996 (Anexo 1) deberá cumplirse el siguiente requisito:

La Empresa deberá  estar calificada en las siguientes especialidades:

* Hidráulica: 90 % 
* Electromecánica: 10 %

Artículo 8 -  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Se fija el plazo de ejecución de la obra en DOSCIENTOS DIEZ (210) días calendarios, a contar de la fecha del Acta del Replanteo de la misma y hasta su Recepción Provisional.

Artículo 9 -  SISTEMA DE CONTRATACION

La contratación de la presente obra será por el sistema de AJUSTE ALZADO, por lo que el Proponente deberá considerar dentro de su cotización la ejecución de todos las tareas necesarias para completar los trabajos de acuerdo a los objetivos planteados en las especificaciones.

Las cantidades de obras que figuran en cada ítem del cómputo y el presupuesto servirán de base para la certificación parcial y a cuenta, durante la ejecución de los trabajos; siendo el monto total fijo e inamovible. Se deja expresa constancia que el precio total incluye cualquier otro trabajo y/o material, que aún sin tener partida expresa, sea necesario e imprescindible ejecutar, para dejar las obras totalmente concluidas y de acuerdo a su fin.

Artículo 10 -  COMISION  DE  PREADJUDICACION  - ADJUDICACION

La Comisión de Preadjudicación estar  constituida por los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo Municipal. 
Su función específica, será la de asesorar a las autoridades acerca de la aceptación o el rechazo del proponente, en base a la presentación de la documentación requerida y a los antecedentes técnicos y económicos que se hayan aportado, y la de recabar cualquier otra información que estimase conveniente, para determinar condiciones legales, de idoneidad, económicas y financieras, y de plantel y equipo para ejecutar la obra.

Para cualquier inspección, en que la Comisión de Preadjudicación debiera trasladarse fuera de la localidad de Capilla del Monte, el Proponente se hará cargo de los gastos de traslado, salvo que en el caso de los equipos, este último dispusiese traerlos hasta esta Ciudad.

Una vez decidida la conveniencia de la propuesta, la Comisión de Preadjudicación exigir  al futuro Adjudicatario, la siguiente documentación de acuerdo a su situación al momento de la presentación:

a) INSCRIPTOS EN EL REGISTRO

Copia autenticada ante Escribano Público, del "Certificado de Habilitación para Adjudicación en la Especialidad", expedido por el Registro de Constructores de la Provincia de Córdoba, constando que el Proponente acredita poseer capacidad de ejecución para que se le adjudique la obra.

b) NO INSCRIPTOS EN EL REGISTRO

Antes de la adjudicación, deben tener concluidos todos los tr mites de inscripción, calificación y habilitación, exigidos por el Registro de Constructores de la provincia de Córdoba, debiéndose presentar el certificado que lo habilita para la adjudicación,  prescrito en el apartado precedente: "Inscriptos en el Registro".

Finalizado el estudio de la documentación correspondiente a esta presentación, la Comisión de Preadjudicación elevará  al Ejecutivo Municipal las conclusiones, proponiendo la solución más conveniente, para que dicha autoridad decida en definitiva.

Artículo 11-  FIRMA DEL CONTRATO

Resuelta la adjudicación de la obra, se citará a la empresa adjudicataria, para la firma del contrato de ejecución.

Previo a la firma del contrato, la Empresa adjudicataria deberá  constituir la garantía correspondiente de acuerdo a lo especificado en el Art. 25 del presente pliego.

Serán documentos del Contrato a celebrarse para esta obra, además de los que el ordenamiento jurídico señale como de aplicación obligatoria, los siguientes:

* La propuesta y su documentación anexa.

* El Pliego de la Obra firmado por el Adjudicatario

* Los documentos del proyecto enumerados en los Artículos correspondientes del presente Pliego Particular de Condiciones.

* El Certificado de Habilitación para la Adjudicación de la Obra, expedido por el Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba. 

Artículo 12 -  DISPOSICIONES GENERALES

Todos los trabajos a contratar en virtud del presente pliego se ajustarán a lo establecido en la Ley Provincial de Obras Públicas No 8614/97, y Decreto Nº 1.345/97 de prórroga de los Decretos Reglamentario No 4757/77 y  Decreto No 4758/77 (Pliego general de Condiciones) y demás legislación en vigencia.

Artículo 13 - LEYES, NORMAS, REGLAMENTOS Y ESPECIFICACIONES QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO  Y REGIRAN LA CONTRATACION

Constituyen este proyecto y pasarán a formar parte del contrato de ejecución dando fe en caso de controversia, los siguientes documentos:

a) Memoria Descriptiva de la Obra.

 b) Decreto Provincial N° 1.345/97 de prórroga de los Decretos N° 4.757/77 (Reglamentarios de la Ley de Obras Públicas) y Decreto N° 4.758/77 (Pliego General de Condiciones).

c) El presente Pliego Particular de Condiciones.

d) Pliego General de Especificaciones Técnicas.

e) Pliego Particular de Especificaciones Técnicas.

f) Computo Métrico y Presupuesto Oficial.

g) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones.

h) Las siguiente Leyes, Normas y/o especificaciones:

1)Ley No 19.587/72 - Decreto Reglamentario 351/79 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

2) Normas para materiales y estructuras de Hormigón Armado y Pretensado vigentes en las Normas IRAM, en Di.P.A.S.  y Municipalidad de Capilla del Monte.

3) Normas y recomendaciones IMPRES - CIRSOC 103 - CIRSOC (para todos los c lculos), Norma DIN 1045 (Versión 1972) y DIN 4227 , Reglamento Argentino de Hormigón PRAEH (excluyendo cálculos).

4) Normas y especificaciones técnicas de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.).

5) Normas y especificaciones Técnicas de ENARGAS y ECOGAS.

6) Normas y Especificaciones Técnicas de la ex-Dirección Provincial de Hidráulica y ex E.P.O.S que estén relacionadas con este tipo de obra.

7) Ordenanzas y Decretos de la Municipalidad de Capilla del Monte involucradas en el presente proyecto.

8) Ley Provincial  del Ambiente N° 7343/85 y el Decreto N º 2131 (Reglamentario del capítulo IX "Del Impacto Ambiental", de la ley 7343). 

9) Ley de Contabilidad de la Provincia N° 7631 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1882/80 - Régimen de contrataciones de la Provincia. 

10) Ley N° 24557 de Riesgo de Trabajo; N° 24028 de Accidentes de Trabajo; N° 19587 de Seguridad e Higiene del Trabajo - el Decreto N° 911/96 de Reglamento para la Industria de la Construcción.  Las Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) N° 231/96 y 51/97.

11) Decreto Ley N° 1332-C-56 y su Decreto Reglamentario N° 2074-C

12) Decreto N° 2503/70 sobre Registro de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba y las Resoluciones N° 656/1/68 y N° 986/6/75 ambos del ex Consejo Profesional de la Ingeniería y la Arquitectura.

13)Las siguientes disposiciones vinculadas con el Registro de Constructores: los Decretos del P.E. Nros. 809/96 y 8/98, y las Resoluciones Nros. 105/96, 139/96, 071/98 y 042/98, de la ex-Secretaria de Viviendas O. y S. Públicos, de dicho Registro.

i) Los siguientes planos:

  Nº                       NOMBRE DEL PLANO

1. PLANIMETRIA Y PERFIL LONGITUDINAL DEL ACUEDUCTO.

2. TRAMO DE ACERO A LA VISTA - PLANTA.

3. VISTA DE FRENTE DE LA CAÑERIA EN EL PAREDON DEL DIQUE .

4. ESTACION DE BOMBEO - CAÑERIAS - VISTA EN PLANTA Y CORTE.

5. ESTACION DE BOMBEO - CAÑERIAS - VISTA EN CORTE BALCON.

6. DETALLE DE INSTALACION VALVULA DE AIRE.

7. DETALLE ZANJA.

8. DETALLE ESTRUCTURA METALICA PLATAFORMA ESTACION BOMBEO.

9. INSTALACION ELECTRICA - TABLERO DE COMANDO.

10. TABLERO GENERAL - DIAGRAMA UNIFILARES. 

11.  CAÑERIA DE NEXO Dº 300 mm.

La enumeración precedente no es limitativa, teniendo validez, además, aquellas disposiciones legales que, sin estar específicamente mencionadas, continúan en vigencia.

Artículo 14 -  ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO

1 - La Contrata

2 - Legajo Técnico

      a) Notas aclaratorias ( si las hubiera)
      b) Planos
          b.1 - de detalles
          b.2 - constructivos.
          b 3 - de conjunto

      c) Pliegos y especificaciones.
           c.1 - Pliego de condiciones particulares
   c.2 -  Decreto N° 4.758/77 (Pliego General de Condiciones).
           c.3 - Pliego de especificaciones Técnicas particulares.
           c.4 - Pliego de especificaciones para la construcción de obras externas de provisión de agua  y desagües, de O.S.N.

d) Memoria descriptiva.

3 Presentación del Oferente aceptada por el Comitente. 

En caso de discrepancia en los documentos del proyecto regirá el orden de  prelación dispuesto por el Art. 11 del Pliego General de Condiciones.

Artículo 15 -  PRESENTACION DE LA EMPRESA EN LA LICITACION

	Los proponentes deberán presentar dentro de un "SOBRE PRESENTACION" , cerrado, lacrado y sellado, la siguiente documentación:

1. Solicitud de admisión, conforme al modelo adjunto.

2. Garantía de la propuesta, equivalente al 1% (uno por ciento) del importe del presupuesto oficial, la que podrá  constituirse por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 20 del Pliego General de Obras Públicas (Decreto Provincial Nº 4758/77). En caso de que el Proponente optare por la opción d- del mencionado artículo 20,si los bonos perdieran valor de cotización en el momento del ofrecimiento, dichos bonos deber n ser reemplazados por otra forma de garantía a total satisfacción del Comitente.-

3. Certificado de habilitación para la obra, extendido por el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas, o en su defecto Garantía de Inscripción cuyo monto será  equivalente  al que deba constituirse como garantía de la propuesta. Las garantías se constituirán de acuerdo a lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 8614 de Obras Públicas. En caso de que el Proponente optare por la opción d- del mencionado artículo 20,si los bonos perdieran valor de cotización en el momento del ofrecimiento, dichos bonos deberán ser reemplazados por otra forma de garantía a total satisfacción del Comitente.-

4. Recibo de adquisición del Pliego de la licitación.

5. Inscripciones de la Empresa: Se presentar n constancias de la inscripción de la Proponente en IVA e Ingresos Brutos, o disposición extendida a todas las Empresas en caso de constituirse en Consorcios o UTE.

6. Plan de Trabajos, Curva de Inversiones y Métodos Constructivos a Emplear: Se hará  una síntesis explicativa de la metodología de los procesos de construcción de los ítem de la obra y del encadenamiento entre ellos, mediante un plan de trabajos expresado en porcentaje (%) sobre el Monto Total de la Obra,  y ser  concordante con el plan definitivo a presentar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 29 al  "Plan de Trabajos y Curva de Inversiones".  Se acompañar  documentación técnica, catálogos, etc., que pudiesen aclarar los procesos constructivos; como así también de los materiales (cañerías), de las instalaciones electromecánicas (equipos de bombeo, componentes del tablero, sensores de presión, etc.) y del equipamiento a utilizar. 

7. Listado de Equipos: Se enumerarán los equipos destinados específicamente a la ejecución de la obra, de acuerdo al modelo designado como Planilla Nº 1 inserta en el apartado "Formularios y Planillas".  Se hará  una lista por Empresa en caso de integrarse en Consorcio o UTE.

8. Listado de Obras en Ejecución, Ejecutadas y a Ejecutar: Se hará  una breve reseña de las principales obras ejecutadas en los últimos diez años, de acuerdo al modelo designado como planilla Nº 2.  En caso de integrarse en Consorcio o UTE, se presentará  una planilla por cada Empresa integrante del mismo.  Para aquellas obras en ejecución y a ejecutar, se hará  un listado similar al anterior (en planillas separadas según sea el caso) de acuerdo al modelo designado como Planilla  Nº 3, incorporado en el apartado "Formularios y Planillas", debiéndose cumplimentar con las mismas disposiciones en caso de integrarse en Consorcio o UTE. Se adjuntarán los comprobantes que corroboren lo declarado en cumplimiento de este Artículo, tales como actas de replanteo y de recepción; certificados de comitentes, etc. de las obras ejecutadas en los últimos diez años, pudiendo ampliarse la información, con la documentación pertinente a criterio del proponente.

9. Nómina Del Personal Profesional: Se listará  al personal Profesional que integra los cuadros de la Empresa, según el modelo de Planilla Nro. 4 que se encuentra en el apartado "Formularios y Planillas".  Se detallarán los antecedentes del Representante Técnico, quien demostrará idoneidad en el tipo de obra a realizar. Se deberá  identificar al personal directivo del restante. En caso de integrarse Consorcio o UTE, se confeccionará  una planilla por Empresa.

10.  Capacidad Económica - Financiera

El proponente deberá  presentar la siguiente documentación:

a) Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al último ejercicio.

b)  Aquellas Empresas y/o Sociedades que  provengan de escisiones o no, pero cuya antigüedad sea igual o menor a un (1) año, deberán presentar un Estado Patrimonial en reemplazo del Balance General y Estado de Resultados.

La documentación a presentar deberá  estar certificada por Contador Público Nacional y autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

c) Referencias bancarias, financieras y comerciales.

d) Cuando al acto licitatorio concurran asociadas y/o agrupadas dos (2) o más Empresas, bajo la forma jurídica de Unión Transitoria de Empresas (UTE), lo requerido en "b" y "c", será  de aplicación para cada una de las Empresas que la conforman. -

11. Sobre Propuesta: debidamente cerrado, lacrado y sellado conteniendo en su interior la propuesta de acuerdo a las siguientes especificaciones:

a) La fórmula de Propuesta, según modelo adjunto.
b)  El presupuesto de la obra ítem por ítem, de la misma forma que el presupuesto oficial. Los precios unitarios ofertados por el Proponente se aplicaran a las cantidades de cada ítem del presupuesto oficial y el valor final resultar  de la suma de los montos correspondientes a cada uno de los ítem.

Artículo 16 -  ACLARACION SOBRE LOS PRECIOS Y MAYORES COSTOS

Los precios unitarios presentados por el Proponente y aceptados por el Comitente, se aplicarán en la certificación parcial y provisoria de los trabajos, ya que el sistema de Ajuste Alzado a aplicar en la presente obra prevé un precio único y total para todos los trabajos a realizar.

Cabe dejar perfectamente aclarado que no se reconocerán mayores costos por variaciones de precios en los materiales, equipos, insumos y/o mano de obra, debido a la vigencia del artículo 7 de la ley 23.928, según texto de la ley 25.561.

Artículo 17 -  PREVISIONES DE LA PROPUESTA

Previo a formular su oferta, el Proponente deberá estudiar e inspeccionar el terreno, estudiar el suelo y subsuelo, la naturaleza del mismo, la necesidad de usar explosivos o equipos especiales para las excavaciones, posición y fluctuación de la capa freática, deberá  requerir las informaciones relacionadas con la ejecución de la obra y condiciones climáticas zonales, caudales y sentido de escurrimiento de las aguas de lluvias y todos los datos que incidan en los trabajos, así como los relativos al costo y duración de los mismos.

El Proponente deberá considerar dentro de su propuesta, todo el trabajo no explícitamente especificado en el proyecto y que fuera necesario efectuar para la correcta ejecución y terminación de los ítems de la obra.

Asimismo se deberán respetar las Normas que los Entes Jurisdiccionales públicos tengan vigente referente a pedidos de permiso para remover circunstancialmente alguna instalación, solicitando la presencia de sus respectivos supervisores cuando sea necesario. 

En consecuencia, no se admitirá  reclamo alguno del Contratista relacionado con la falta total o parcial de informaciones, ni podrá  el Contratista aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y documentación de la obra.

Artículo 18 -  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

La oferta se considerará firme y válida por el término de Sesenta (60) días calendarios contados a partir de la fecha de su presentación.

Cabe aclarar que en ningún caso se considerará  que los pedidos de prórroga de mantenimiento de oferta que pudiera formular la Municipalidad, constituyen aceptación total ó parcial de la respectiva propuesta. 

Solo en circunstancias excepcionales y antes del vencimiento del plazo de validez original, la Municipalidad podrá solicitar al Oferente una prórroga. 

Tanto la solicitud como la respuesta, deberán realizarse mediante notificación firmada. Si el Oferente no acepta la prórroga se lo tendrá  por desistido de su propuesta.

 Si accede a la solicitud de la Municipalidad, no podrá  modificar su oferta, limitándose solo a extender la validez de la misma.

Artículo 19 - INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES DE  OBRAS PUBLICAS

Se exigirá a la Empresa Contratista la inscripción y habilitación en el registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba, previo a la adjudicación.

Artículo 20 -  INSCRIPCIONES Y GRAVAMENES LOCALES

Dentro de los quince (15) días de la notificación de la adjudicación y previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá  presentar la siguiente documentación:

* Certificado de Inscripción y/o pago del Impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de Córdoba.

* Declaración de aceptación de la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Cosquín, de la Provincia de Córdoba.

El incumplimiento de los requisitos anteriores será causal suficiente para revocar la adjudicación.

Correrán por cuenta exclusiva del Contratista todos los impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales ó municipales que le corresponda abonar como consecuencia de las prestaciones a que se obliga en el contrato. 

Se considerar  que tales gravámenes se hallan incluidos en el precio de la oferta.

Artículo 21  -  REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuará  el Registro de la Obra ante el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No 2503 del 16-07-70, aprobatorio de la Resolución No 656/1 del 27/12/68 del ex - Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura, debiendo presentar a la Inspección dentro de los quince (15) días calendarios a la fecha del Replanteo inicial, una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el trámite de Registro de Obra.

La falta de presentación de tal constancia en el término fijado, hará pasible al Contratista de sanciones previstas en la reglamentación vigente. No se efectuará  certificación alguna hasta que sea satisfecho este requisito, con causa imputable a la Empresa Contratista con las consecuencias que de ello derive.

Será  condición indispensable para la emisión de los certificados de pago, la presentación mensual a la Comitente por parte del Contratista, del comprobante del depósito de Honorarios Profesionales y Aportes Jubilatorios de la Representación Técnica de la obra calculados en base al monto total certificado del mes anterior. 

Artículo 22  -  LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y de Higiene y Seguridad y sus reglamentaciones en vigencia y todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Asimismo será  responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal haciendo suyas las derivaciones que de el dependen, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.

El Contratista está obligado a presenta dentro de los cinco (5) días de iniciada la obra, un Contrato de Afiliación a una Compañía Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) de acuerdo a lo establecido en la Ley de Riesgos de Trabajo No 24557 con la nómina completa del personal, tanto administrativo, obrero y profesional a emplearse en la obra.

Artículo 23  - SALARIOS MINIMOS

Regir  los salarios básicos, mejoras y demás disposiciones establecidas para la zona de emplazamiento de la obra por la legislación vigente.

Artículo 24  -  SEGUROS

Generalidades: 

Sin perjuicio de sus responsabilidades, el Contratista deberá tomar a su cargo en Compañías de Seguro de reconocida solvencia, dentro de los cinco (5) días de iniciada la obra los seguros indicados a continuación y someter  las respectivas pólizas y Contratos de Afiliación a la aprobación de la Contratante, debiendo presentar la constancia del pago total.

 Si el Contratista dejare de contratar o mantener en vigencia tales seguros, la Contratante, al margen de cualquier otro derecho o recurso que le pudiera corresponder, podrá contratarlo o renovarlo con cargo al Contratista, descontando los importes abonados por esos conceptos de cualquier crédito que tuviese el mismo con la Contratante a su favor.

Bajo ningún concepto se aceptar  el llamado "AUTOSEGURO". 

Ser  obligación del Contratista efectuar todas las gestiones y ejecutar todos los actos y notificaciones que exigen las Pólizas y Contratos de Afiliación y Normas complementarias, en caso de cualquier cuestión o suceso.

Se establece expresamente que el Contratante no efectuará ningún pago al Contratista en concepto de seguros, ya sea por prima, ajuste de capital asegurado ó agravamiento del riesgo.

a) Seguros de Accidente de Trabajo: El Contratista asegurar  contra los riesgos de accidentes de trabajo, de acuerdo con las leyes vigentes (Ley Nac. 24557), Decretos Reglamentarios o disposiciones que las sustituyan, a todo el personal obrero, profesional, técnico y administrativo que trabaje en las obras, incluyendo al personal de la Comitente destinado a prestar tareas en las mismas.

b) Seguro de Equipos: El Contratista deberá  asegurar los equipos por daños contra terceros.

c) El Contratista acreditará  el cumplimiento de las exigencias de seguros por accidentes de trabajos y de equipos, al firmarse el acta de replanteo.

Los seguros tendrán vigencia durante el plazo de ejecución de la obra, siendo estos seguros obligatorios, debiendo presentar la constancia de pago total.

Artículo 25  -  GARANTIA DEL CONTRATO - FIANZAS

Para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones, el adjudicatario de la presente obra deberán cumplimentar las siguientes garantías:

* Garantía de contrato: Dentro de los quince (15) días de la notificación de la adjudicación y previa a la firma del contrato, el adjudicatario deber  garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto equivalente al cinco por ciento (5 %) del importe del monto contractual.

La garantía podrá constituirse de acuerdo a las modalidades del Art. 31 de la Ley  de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba, Nº 8614/97.

Estas garantías se deberán constituir por alguna de las siguientes formas:

a) Dinero efectivo, en depósito en el Banco de la Provincia de Córdoba a favor del E.M.O.S.S. de Capilla del Monte.

11. b) Títulos ó Bonos de la Nación, ó Provincia al valor de su cotización en plaza, depositando en el Banco de la Provincia de Córdoba a favor del  E.M.O.S.S. de Capilla del Monte. En caso de que el Proponente optare por la opción d- del mencionado artículo 20,si los bonos perdieran valor de cotización en el momento del ofrecimiento, dichos bonos deberán ser reemplazados por otra forma de garantía a total satisfacción del Comitente.-

c) Fianza bancaria ó de entidad autorizada por el Banco Central de la República Argentina.

d) Seguro de Caución otorgado por compañía autorizada por Organismo Nacional competente

e) Certificado de Crédito Líquido y Exigible que tuviera el Proponente contra la Administración Municipal

La Fianza ofrecida podrá  integrarse completando entre sí las distintas alternativas y podrá  sustituirse durante su vigencia con la aceptación previa de la Autoridad competente

Los depósitos deberán efectuarse a la orden del E.M.O.S.S. de Capilla del Monte  y se realizarán en el Banco de la Provincia de Córdoba.
Las fianzas deberán constituirse hasta la extinción total de las obligaciones que la originen.

Si la Municipalidad considerase necesario a su juicio, elevar la garantía de la Ejecución de Contrato por alguna razón fundada, lo podrá  hacer hasta llegar al seis por ciento (6%) del importe contractual. (Art. 31 - Ley de O.P. Nro. 8614/97).

Artículo 26  -  DAÑOS A TERCEROS

Las indemnizaciones a abonar a terceros por daños causados  durante la ejecución de la obra, como ser agrietamientos de propiedades linderas, roturas de vidrios, cañerías e instalaciones, redes telefónicas y de corriente eléctrica, etc., correrán por cuenta y cargo del Contratista, por cuya razón deberá  tomar todos los cuidados y precauciones necesarias.

Artículo 27  -  LIBROS   DE  ORDENES  DE  SERVICIOS  Y  DE  NOTAS  DE  PEDIDOS.

El Contratista deberá  proveer a la Inspección de Obras de un Libro que contenga hojas por duplicado, totalmente enumeradas, destinado a Ordenes de Servicios y Actas que imparta la Inspección. Cada hoja tendrá  un encabezamiento donde se señalará  el nombre de la obra, el plazo, el monto, el Nº del Expediente por el cual se aprobó, la fecha y el Nº de la Orden. Este encabezamiento podrá  estar impreso o podrá  efectuarse con un sello que lo proveerá  la Contratista.

El libro de Notas de Pedido tendrá  idénticas características y también ser  provisto por la Contratista 

A medida que se agoten los ejemplares deberán ser repuestos por la Contratista.

Estos registros serán sellados y rubricados por el personal autorizado que cada una de las partes designe y se encontrarán permanentemente en obra.

Artículo 28  -  REPLANTEO DE LA OBRA

El Replanteo total o parcial será efectuado en forma conjunta entre la Contratista y la Inspección de la Municipalidad. Debe ser realizado dentro de los treinta (30) días de firmado el contrato, y ser  plasmado en un Acta firmada por ambas partes.

Es obligación de la Contratista por sí o por su representante en obra, participar en las operaciones de replanteo y en el caso que no lo hiciera, se le dará expresamente por conforme con las actuaciones de la Inspección, no admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de ninguna naturaleza, que interpusiera posteriormente. 

Las operaciones de replanteo serán efectuadas prolijamente, estableciendo marcas, mojones o puntos de referencia, que el Contratista está obligado a conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.

Al terminar las operaciones de Replanteo Total o Parcial se labrar  acta en la que se hará  constar:

a) Lugar y fecha del acto.

b) Denominación y ubicación de las obras a ejecutar.

c) Nombre de los actuantes.

d) Todo otro antecedente u observaciones que la Inspección crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, croquis, etc.).

e) Observaciones o antecedentes que el Contratista estime necesario formular.

El Acta deberá  ser firmada por el responsable de la Inspección y el Contratista o su Representante Técnico aceptado.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles u otros, será por exclusiva cuenta del Contratista.

Si ocurriere el extravío de señales o estacas y fuera menester repetir las operaciones de replanteo, la Contratista deberá  pagar además de los nuevos gastos, el importe proveniente de las erogaciones por movilidad y viáticos de los empleados de la Comitente que tengan que intervenir.

Artículo 29  -  PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

Una vez notificado el Contratista de la aprobación del Contrato, deber  adaptar el Plan de Trabajos, a la fecha de dicha notificación y a los meses calendarios del año, debiendo el mismo ser presentado para su aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de esta fecha, acompañado del organigrama previsto para cumplimentar dicho plan.

Si dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de presentado, la Municipalidad no formulara observación alguna, el ajuste del Plan de Trabajos quedar  consentido. 

En caso de ser observado el Contratista presentar  nuevamente, en forma inmediata, el plan corregido sin que ello justifique dilatar la iniciación de las obras.

La tramitación de la aprobación del Plan de Trabajos no dará  lugar a prórroga alguna del plazo de ejecución contractual de la obra.

Dicho Plan, se realizará  en función del plazo de ejecución, y constar  de los siguientes elementos:

A) Se elaborará  mediante el método de Gantt (diagrama de barras horizontales), graficando una barra para cada item. En la columna "descripción del item" se consignará  el mismo listado de ítems indicado en la Planilla de Cotización. En la columna "porcentaje de incidencia" se consignarán los correspondientes a cada uno de los ítems con respecto al precio total de la obra. Asimismo se indicarán los porcentajes de inversión semanal para cada item consignado. El Plan de Trabajos, para ser aceptado por el Comitente, deberá  contemplar que la obra se iniciará , tanto para la red de colectoras como para la cañería de impulsión, desde la estación de bombeo Nº 3  y avanzar hacia aguas arriba de las cañerías. 

B) La Curva de Inversión prevista para cada semana, desde la iniciación hasta la finalización de la obra, deberá  mantenerse dentro de un área limitada por una curva superior I' y otra inferior I" (ver tabla con banda oficialmente establecida) para ser considerada admisible por el Comitente. Esta gráfica resultará  del plan de trabajo presentado.

C) Memoria Descriptiva que exponga, los métodos de trabajo, el número y características de los frentes de trabajo, y el equipamiento propuesto para cada uno.
  
D) Descripción de los métodos constructivos a emplear en la ejecución de los ítems de la Obra, acompañando toda la documentación técnica, catálogos, etc., que pudiesen aclarar estos procesos constructivos, empleando los materiales propuestos en la Oferta.

En la confección del plan, se tendrá  en cuenta que las obras deberán realizarse en jornadas diurnas de duración acorde con la legislación vigente. 

El Plan de Trabajos aprobado se mantendrá vigente mientras no se produzcan atrasos por causas justificadas.

De ocurrir esta situación el Contratista deberá presentar dentro de los cinco (5) días de terminado cada mes calendario en el que se hubieren producido los atrasos, el pedido justificativo a los efectos de su consideración.

La Inspección de Obra, luego de evaluadas las causales de atraso elevará  a consideración de las Autoridades del E.M.O.S.S. de Capilla del Monte la prórroga de plazo juntamente con el Plan de Trabajos actualizado, similar al Plan de Trabajos aprobado, modificado por la influencia de los casos de atrasos justificados, en aquellas partidas cuya ejecución hubiera sido afectada directa o indirectamente por dichas causas, debiendo hacerlo como máximo bimestralmente.

El Plan de Trabajos actualizado quedará  sujeto a la aprobación de la Autoridad del E.M.O.S.S. de Capilla del Monte y logrado lo cual sustituirá definitivamente al anterior como documento contractual.

Si por cualquier razón las causales del atraso sean injustificables y no conceda derechos al Contratista a una prórroga de plazos, el ritmo de progreso de las obras, resulta en cualquier momento a juicio de la Inspección, demasiado lento para asegurar la terminación fijada o en el plazo prorrogado para la terminación, la Inspección lo notificar  por escrito al Contratista y éste adoptará  de inmediato las medidas que sean necesarias y la Inspección aprobará acelerar el progreso a fin de completar las obras en la fecha fijada o en el plazo prorrogado. El Contratista no tendrá  derecho a pago adicional alguno por adoptar tales medidas.

Artículo 30  -  HORARIO  DE  TRABAJO

Durante la ejecución de la obra a requerimiento del Contratista, la Inspección, podrá  autorizar jornadas de labor de mayor duración, siempre que encuentre atendibles las causas aducidas por el mismo y encuadren en la legislación vigente, pero ello no dará  lugar a reconocimiento de ninguna naturaleza por parte de la Comitente.
Las obras permanentes que necesiten la presencia de la Inspección, no podrán ejecutarse: fuera del horario normal de trabajo, durante la noche, sábados, domingos y feriados, salvo autorización en contrario de la Comitente o en su defecto de la Inspección, excepto cuando los trabajos sean inevitables y/o absolutamente necesarios para salvar vidas, bienes, seguridad de las obras, hechos que deberán ser comunicados a la Inspección.

Las limitaciones en los horarios que impone este artículo, no son de aplicación para aquellas tareas que no precisan de la Inspección durante su ejecución, tales como mantenimiento, desarmado de encofrados, llenados con agua de cañerías y cámaras, etc..

Si el Contratista solicitara la autorización para trabajar en horarios y días no autorizados en este apartado, y necesitare de la presencia de la Inspección, deberá  presentar el correspondiente pedido, siendo a su cargo los mayores gastos que se produjesen.

Artículo 31   -  MARCHA  DE  LOS  TRABAJOS

La demora en la ejecución de los trabajos, dará  lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes.

Si se produjesen atrasos con respecto al Plan de Trabajos, se deberá  indicar por Nota de Pedido las causas, señalando las que sean justificables, para su aprobación.  Dicha novedad será  comunicada a la Inspección dentro de los Diez (10) días de producido el atraso, informando el hecho que lo motivó.

Los datos pluviométricos de las lluvias que hayan ocasionado atrasos, serán obtenidos de las fuentes informativas, siguiendo el presente orden: 1) Servicio Meteorológico Nacional, 2) Entidad Oficial ó 3) Cooperativas de Productores cercanas a la obra. No obstante, los días de atraso por lluvia que se considerará , por cada mes, no superarán los establecidos en la "tabla indicativa de las frecuencias media de días de lluvia", que forma parte del presente pliego.

No se reconocer  ningún tipo de indemnización por atraso de las obras como consecuencia de las lluvias.     
   
Si el pedido fuera resuelto favorablemente deberá , presentar Plan de Trabajos actualizado, similar al Plan de Trabajos vigente, pero modificado por las influencias de las causas de atraso justificables.

En este nuevo plan, sólo podrán diferir del original o del anterior, aquellos Ítem cuya ejecución hubiere sido afectada, directa o indirectamente, por las causales justificables mencionadas.

El Plan de Trabajos actualizado deberá  ser expresamente aprobado o rechazado por el E.M.O.S.S. de Capilla del Monte, debiendo el Contratista en este último caso introducir las modificaciones que se indiquen, en el plazo que a tal efecto se le fije.

Artículo 32   -  CERTIFICACIONES

Artículo 32 - 1 - Medición  De  La  Obra, Confección  Del  Certificado  Mensual
A los fines de la  certificación mensual, se cerrará  la medición de las obras ejecutadas y aprobadas, el último día hábil de cada mes.

El cómputo métrico de cada ítem para la certificación mensual, surgirá  de tomar la cantidad real total ejecutada y aprobada hasta la fecha, restándole las cantidades certificadas con anterioridad.

En los ítems cotizados en forma global se considerar  el porcentaje realizado y aprobado, con respecto a la cantidad total a ejecutar.

Las mediciones y cómputos de los trabajos que se realicen en la obra, así como los cómputos que se efectúen para la certificación mensual, se comunicarán al Contratista por Orden de Servicio.

En oportunidad de la medición se dejará  constancia de las divergencias producidas y de todo otro hecho digno de mención.

Los trabajos que pudiesen quedar ocultos, serán medidos antes de la prosecución de aquellas tareas que generen tal ocultamiento, debiendo el Contratista dar aviso a la Inspección, para su control, medición y aprobación, dejándose sentado por escrito para constancia de las partes.

Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes de cerrada la medición, la Inspección entregará  al Contratista los cómputos y las instrucciones correspondientes, para la confección de un juego completo del certificado de obra, constituido por el legajo original y el número de copias que correspondiere.

A continuación el Contratista contará con Tres (3) días hábiles para la aclaración de dudas, para la confección y firma de dicho juego completo, y para su entrega en Mesa de Entradas del E.M.O.S.S. de Capilla del Monte, quién dará trámite al mismo. 

El cómputo métrico que dará origen al certificado de pago, constará   de una planilla resumen de lo ejecutado en el mes, y de las planillas complementarias que hayan dado origen a dicha planilla resumen.

En caso de requerir el Contratista una copia negociable del certificado, deberá mencionarlo expresamente en la nota de elevación que acompaña a la documentación del mismo, y se deberá  retirar en la Oficina de Pagos del E.M.O.S.S., la cual le será  entregada bajo recibo.

El Contratista se hará  cargo de la confección del certificado y de todos los gastos que dicha confección origine.

La demora en los plazos imputables al Contratista, no dará  derecho al reclamo de intereses de su parte.

Artículo 32 - 2  - Mediciones  Y  Ensayos

Desde el comienzo y hasta la recepción definitiva de la obra, el Contratista pondrá  a disposición de la Inspección el  personal, materiales, formularios y todos los elementos necesarios para poder efectuar los replanteos, las mediciones, la toma de muestras de materiales, los ensayos, como así mismo proveer  de los formularios, tanto para las actividades precedentemente enunciadas, como para la confección de la documentación correspondiente a las certificaciones. 

Todos los gastos derivados de estas funciones no recibirán pago adicional, por lo que se consideran incluidos prorrateados dentro de los precios de los distintos ítems.

Artículo 32 - 3  - Certificados  De  Las  Obras

Los certificados serán emitidos mensualmente por la Municipalidad, dentro de los DIEZ (10) primeros días del mes siguiente de efectuados los trabajos,  período éste que podrá ser prorrogado como consecuencia de alguna mora atribuible al Contratista.

Si el Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la expedición de certificados, éstos serán tramitados de oficio, sin perjuicio de las reservas que se formularan  al efectuar el cobro.

Todos los certificados parciales son acumulativos y tienen carácter provisional de pago a cuenta, al igual que las mediciones que les dan origen, quedando sometidos a los reajustes que correspondieren.

Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de obra, podrá la Municipalidad a pedido del Contratista, postergar dicha certificación, sin que el atraso en su emisión signifique la obligación del pago de intereses por parte de la Municipalidad.

Artículo 32 - 4  - Acopio  De  Materiales

En esta obra no se reconocerá pago alguno por acopio de materiales.

Artículo 32 - 5  - Pago  De  Los  Certificados -  Mora

El pago de los Certificados se efectuará dentro de los TREINTA (30) días posteriores al período mensual de los trabajos, siempre y cuando tales trabajos estén debidamente certificados.

La mora en el pago dará derecho al Contratista a percibir únicamente intereses, sin necesidad de requerimiento ni formulación de reserva alguna, a la misma tasa que aplica el Banco de la Provincia de Córdoba para descuento de Certificados de Obras Públicas.

Artículo 32 - 6  - Fondo  De  Reparo

De cada certificado,  se  deducirá  el  importe  del cinco  por ciento (5%)  del valor del mismo. Estas deducciones se retendrán y constituirán el "Fondo de Reparo" como garantía de la buena ejecución de los trabajos, hasta la fecha de recepción definitiva  de los mismos.  

Este fondo podrá ser sustituido a pedido del Contratista, por otra documentación aprobada por las disposiciones legales vigentes.

Artículo 33 -  INTERESES  SOBRE  GARANTIAS 

Las garantías constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente Pliego, (de Propuestas, de Contrato, y de Fondos de Reparos), no devengarán intereses de ningún tipo.

Artículo 34  -  PRECIOS UNITARIOS DE NUEVOS ITEM

Cuando sea necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, el precio de los nuevos ítems se establecerán de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas Nº 8614 de la Provincia de Córdoba.

Artículo 35   -  DIMENSIONES EXACTAS Y PRECIOS 

Las dimensiones consideradas en los distintos ítems del Cómputo Métrico y Presupuesto de la documentación oficial son aproximadas.

Las dimensiones exactas serán determinadas en cada caso por la Inspección con la asistencia del Contratista o de su Representante Técnico, dejándose debida constancia en las actas que se labren. Estos cómputos serán utilizados para las certificaciones parciales.

Las diferencias que pudieran existir entre el Computo y Presupuesto de la documentación oficial, con los cómputos de los trabajos realmente ejecutados en obra, no dará  derecho al Contratista a ningún tipo de reclamos, ya que la contratación se realiza por el sistema de Ajuste Alzado.  

El pago de los trabajos terminados, realizados según las especificaciones correspondientes, se realizar  según el precio convenido.

En el precio cotizado están incluidos todos los gastos necesarios para la completa terminación de toda la obra.

Artículo 36   -  DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LA OBRA

La Dirección Técnica de la obra así como la Inspección de los trabajos, estarán a cargo del E.M.O.S.S. de Capilla del Monte.

Artículo 37   -  CONDUCCION TECNICA DE LA OBRA

El Contratista será el responsable de la Conducción Técnica de la obra y a tal efecto deberá contar permanentemente en la misma con un Representante Técnico.

Dicha representación ser  ejercida por un profesional con título habilitante de Ingeniero Civil, cuyo alcance fija la Ley 1332 Serie C, inscripto en el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, Ley No 6764, tener cinco (5) años de ejercicio profesional como mínimo y haber desempeñado la conducción de obras similares a la presente y la Comitente a su exclusivo juicio y criterio lo aceptará  o no.

 El Contratista deberá  presentar con su oferta el nombre del profesional correspondiente.

La Contratista será  responsable de los honorarios profesionales que, según el Decreto 1332 - C, su Decreto Reglamentario y las leyes complementarias, se deban abonar por el ejercicio de dicho Representante Técnico.

A su vez dicho profesional deberá  presentar declaración jurada de no haber desempeñado cargo público alguno ni haber sido dependiente del Estado Municipal de Capilla del Monte durante los últimos doce (12) meses anteriores a la firma del contrato.

La presencia en obra del Representante Técnico será permanente. En casos justificados, la Inspección de obra, a su exclusivo criterio, podrá autorizar la ausencia temporaria del Representante Técnico, debiendo asentarse tal autorización en el Libro de Órdenes de Servicio.

El Representante Técnico deberá  hacerse presente en el E.M.O.S.S. cuando así le sea requerido por la Inspección.

El incumplimiento de sus funciones por parte del Representante Técnico, dará  lugar a la aplicación de una multa al Contratista; pudiéndose además ordenar su reemplazo, sin derecho a reclamo alguno por ningún concepto.

El Representante Técnico cumplirá  fundamentalmente las funciones que se enumeran a continuación:

a) Realizar la Conducción Técnica de la obra.

b) Asistir a la Inspección en el Replanteo de la obra, en la realización de las inspecciones y en la medición de los trabajos ejecutados.

c) Firmar los certificados de obra.

d) Recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones y órdenes que imparta la Inspección, así también la ejecución de estudios y proyectos bajo las pautas fijadas por la Inspección que aprobar  en última instancia el proyecto presentado.

e) Tratar con la Inspección todos los problemas atinentes a la ejecución de los trabajos.

  f) Firmar toda documentación Técnica que la Contratista presente para su aprobación.

Artículo 38   -  INSTRUMENTAL y EQUIPOS TOPOGRAFICOS y DE LABORATORIO.

El Contratista deber  suministrar equipos e instrumental topográfico y de Laboratorio con afectación exclusiva a la Municipalidad para ser utilizados por la Inspección para el control de las obras, a partir del mismo día de inicio de obra, según el siguiente detalle:

a) Instrumental y equipos topográficos 

Un (1) nivel de obra, de precisión, automático y con anteojo de lectura directa; dos (2) miras de cuatro metros cada una; cuatro (4) jalones; una (1) cinta métrica metálica de 50 metros de longitud, con su correspondiente juego de fichas; una (1) cinta métrica metálica de 25 metros de longitud; estacas de madera, clavos y mojones en cantidad suficiente. 

a) Instrumental y equipos de Laboratorio 

Un (1) equipo completo para realizar el ensayo Proctor y para determinar la densidad del suelo in-situ por el método de la arena; dos (2) moldes para probetas de hormigón. 

Todos estos elementos serán entregados a la Inspección al firmarse el Acta de Replanteo. Una vez producida la Recepción Definitiva de la obra el Contratista podrá disponer de todos los elementos señalados en el presente artículo, que le serán reintegrados en el estado en que se encuentren. Los gastos que deba realizar la Contratista para el cumplimiento del presente Artículo no recibirán compensación directa alguna, debiendo prorratearse en el precio de los restantes ítem de la obra.

En caso de incumplimiento del presente artículo la Contratista se hará pasible de una multa diaria del 0,5 % del monto de obra.

Artículo 39   -  PERMISOS PREVIOS Y RECAUDOS TECNICOS Y LEGALES ANTE ORGANISMOS  ESTATALES

El Contratista tendrá  a su exclusivo cargo y costo la realización de los trámites y elaboración de la documentación necesaria para la obtención de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipal y/o Concesionarios  que resulten necesarios con motivo de la ejecución de la obra. Asimismo, será por su cuenta y cargo el pago de los derechos, aranceles, etc., que correspondan abonar por los mismos.

Dichos permisos deberán gestionarse dentro de los cinco (5) días de firmada el Acta de Iniciación de las Obras para que los mismos no afecten el Plan de Trabajos, ya que si se produjeran demoras por este motivo, no se reconocerán prórrogas en el plazo previsto para la obra.

Además, tomar  todos los recaudos técnicos y legales, como así también cumplir  con todas las ordenanzas y disposiciones Municipales con motivo de los trabajos a ejecutar en la vía pública, correspondiente a toda la zona de afectación de la presente obra.

Artículo 40   -  RELACION CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

Si el Comitente lo considera necesario, y a pedido de la Contratista, esta última gestionar  ante las Empresas prestatarias de los servicios de gas, electricidad, correos y telégrafos, ferrocarriles, obras viales, sanitarias, hidráulicas, municipalidades, etc., la autorización para remover aquellas instalaciones que obstaculicen o imposibiliten los trabajos contratados. 

Esta gestión no releva en nada la obligación del Contratista de costear los trabajos de remoción, sean éstos efectuados por sí o por el Ente con jurisdicción si la Autoridad de dicho Ente así lo dispusiere.

La solicitud correspondiente deberá  formularla el Contratista al Comitente con una anticipación de no menos de cinco (5) días.

El Contratista no afectará  en nada a ninguna instalación existente si no cuenta con el consentimiento formal y supervisión en obra de los trabajos, de parte de la entidad con jurisdicción sobre dicha instalación

El Contratista deberá  adoptar las precauciones del caso a fin de evitar que las instalaciones que puedan permanecer en su sitio sean dañadas por los trabajos a ejecutar.

Para todas las instalaciones que deban ser reconstruidas se adoptarán las disposiciones constructivas emanadas de la autoridad con jurisdicción en tales instalaciones o ante la falta de éstas, las instrucciones expresas que el Comitente imparta por medio de la Inspección de obra.

El Contratista es el único responsable por los daños ocasionados por la obra que se ejecuta, no recibiendo del Comitente ningún reconocimiento adicional sobre el importe contractual por las precauciones que adopte o por los trabajos provisorios que deba realizar.

Artículo 41    -  CARTEL DE OBRA

En el lugar que oportunamente designe el Comitente, el Contratista deber  colocar a su cargo, dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato, dos (2) carteles de obra bien visibles, conforme al detalle del plano correspondiente y las instrucciones de la Inspección de obra. 

Artículo 42    - CASOS FORTUITOS

Al respecto regir  las disposiciones del Art. 50 de la Ley No 8614.

Artículo 43    -  PLANOS CONFORME A OBRA y COMPLEMENTARIOS

El Contratista confeccionará y entregará  a la Comitente los siguientes planos:

Artículo 43 - 1  -  Planos Generales y de Detalles del conducto de aducción deberán llevarse actualizados  durante el desarrollo de los trabajos. La planimetría general se efectuará  en escala 1:2.500, el perfil longitudinal en escala 1:250 y los detalles en escala 1:10 ó 1:20. La entrega de estos planos será requerimiento indispensable para la recepción provisoria de la obra.

Artículo 43 -2  -  Planos Generales y de Detalles de la estación de bombeo tanto de las obras civiles como de las electromecánicas. Las escalas que se adopten para el dibujo ser n tales que permitan una fácil visualización e interpretación de los mismos. 

Artículo 43 - 3 - Planos Generales y de Detalles del conducto de nexo de 0,300 m de di metro. La planialtimetría se realizará  en escala 1:1000 y los detalles en escalas convenientes a determinar por la Inspección; deberán llevarse actualizados  durante el desarrollo de los trabajos. 

Artículo 43 - 4 - Planos Generales y de Detalles de la planta potabilizadora. La planialtimetría general se realizar  en escala 1:100. Se efectuar  un plano  para cada unidad de tratamiento o parte de la obra (canaleta parshall, cámara de carga, etc.); los detalles se dibujarán en escalas convenientes a determinar por la Inspección; deberán llevarse actualizados  durante el desarrollo de los trabajos. 

Si cualquiera de los planos citados en el presente artículo fueran observados, el Contratista deberá rehacerlos y completarlos dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la devolución por parte de la Inspección.

Los planos serán claros y fieles a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta: cotas, perfiles, niveles, balizamientos, características, detalles, tipo de letras y diagramación. El formato, los elementos gráficos y el plegado de cada plano responderán a las Normas IRAM de dibujo, destacando que ningún formato será  superior al fijado por el A1. Las leyendas estarán escritas en castellano y las medidas en el sistema métrico decimal.

El Contratista antes de la recepción provisoria los planos generales y de detalles conformes a obra de toda la obra. La provisión de los mismos comprende una copia en película poliéster, tipo COPILENE GT 1 AGFA GEVAERT, y tres copias heliográficas  de cada uno de los planos, en color negro, doblados y encarpetados por juegos.

Asimismo se deberán adjuntar dos (2) juegos de planos en archivos AUTOCAD versión 2000 o última versión, en soporte magnético (CD).

Toda otra información a suministrar (memorias de cálculo, especificaciones, planillas de c lculo etc.), deberá ser presentada una copia impresa y una copia en soporte magnético (CD), en archivos del tipo WORD ó EXCELL última versión existente.

Artículo 44  -  VARIOS PARA  INSPECCION DE OBRA

Los gastos por ensayos, que se hagan en el laboratorio de la obra o que deban ser realizados en laboratorios de terceros (oficiales o particulares),  la provisión de estacas, mojones, pinturas y demás elementos que se requieran para los controles de obra, y asimismo, todos los gastos que demanden la mano de obra y operadores que sean necesarios para los ensayos y tareas de Inspección, incluidos los gastos de transporte y todo lo enunciado precedentemente, que se requiera para su ejecución, serán por cuenta y cargo de la Contratista.

Se proveer  a la Inspección de elementos de protección laborales, tales como cascos, botas de goma, capas, etc.

El listado precedente no es limitativo, debiendo proveerse otros elementos indispensables a criterio de la Inspección. 

Una vez producida la Recepción Provisional de la Obra, los bienes aquí detallados, serán devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren. La provisión de lo enunciado en este artículo, no generar  gastos adicionales, debiendo el Contratista prorratearlos entre todos los ítem que constituyen el Contrato.

Artículo 45   -  ENERGIA  ELECTRICA

En caso de que los proponentes prevean utilizar equipos de construcción accionados eléctricamente, deberán practicar las averiguaciones del caso, sobre la posibilidad de obtener la energía eléctrica de la Empresa que presta dicho Servicio en la localidad, ya que si ello no resultara posible, deberán contar con los equipos propios para su generación.

Si el Contratista decidiera obtener energía eléctrica de la entidad que presta dicho Servicio en la Ciudad, también deberá prever los equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de electricidad, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de la Obra, no pudiendo aducirse como causal de interrupción de las tareas, los cortes de energía, las bajas de tensión, etc.

Artículo 46   -  OBRADOR

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de iniciación de los trabajos se fijar  el lugar de ubicación del obrador, el que estar  cercado, todo en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.

El obrador debe estar permanentemente custodiado. Fuera del horario de trabajo permanecer  cerrado y de noche convenientemente iluminado. La Inspección tendrá  en todo momento libre acceso al mismo.

Artículo 47   -  PRUEBAS  PARA  LA  RECEPCION  PROVISIONAL

Una vez terminadas las obras y antes de la Recepción Provisional de las mismas, se deberá  proceder a efectuar las pruebas de funcionamiento detalladas en el pliego de especificaciones técnicas particulares, estando a cargo del Contratista todos los gastos ocasionados.

El Contratista tendrá  a su cargo la reparación de los desperfectos que se pongan de manifiesto al realizarse dichas pruebas, sin que por ello tenga derecho a formular reclamaciones de ningún tipo, ni a solicitar prórroga del plazo contractual.

En ningún caso se acordará  la Recepción Provisional hasta tanto no se haya cumplido satisfactoriamente con las pruebas antes dichas. Estas pruebas son independientes a las realizadas durante la ejecución de cada parte de las obras.

Artículo 48  -  RECEPCIONES PROVISIONALES PARCIALES

En la presente obra no se realizarán Recepciones Provisionales parciales. 

Artículo 49   -  PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantía que será  de un (1) año a partir de la Recepción Provisional de las obras, el Contratista será  responsable de la conservación de las mismas y de las reparaciones por defectos provenientes de la mala calidad de ejecución de los trabajos a su cargo.

Artículo 50   -  RECEPCIONES DEFINITIVAS PARCIALES

En la presente obra no está previsto realizar  Recepciones  Definitivas Parciales. 

Artículo 51    -  FONDO DE REPAROS

De cada certificado de obra se deducirá un cinco por ciento (5%) del monto, en concepto de Fondo de Reparos hasta la Recepción definitiva. 

Se formará  de acuerdo a lo previsto en el Artículo 59 de la Ley No 8614, el Artículo 43 del Decreto Reglamentario No 4757/77 y el Pliego general de Condiciones.

El Comitente aceptar , o no, constituir el Fondo de Reparos por los medios que fija el Artículo 22 de la Ley No 8614.

Si el Contratista optara por los incisos c), d) ó e) del mencionado Artículo 22, que expresa el medio de constituirlo, este medio elegido debe contener cláusulas de actualización.

Si el Contratista reemplazare el Fondo deducido por Póliza de Seguro de Caución, deberá  dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto No 3925/69 del Gobierno de la provincia de Córdoba.

Si el Contratista se negare a reparar las fallas observadas por la Inspección, El Comitente hará  los reparos por cuenta del Contratista y los abonará  con el Fondo de Reparos y si tal monto no alcanzara, recurrir  al Fondo de Garantía de ejecución de la obra.

Artículo 52   -  SUSPENSION  DE  LOS  TRABAJOS

Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de ejecución, o por otra causa, la Inspección juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realización de las obras contratadas, comunicar  por escrito mediante nota de pedido al Contratista, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, labrándose acta del resultado.

Si la suspensión de la obra excede los treinta (30) días, al término de ese plazo, se librarán los certificados por el trabajo realizado, que haya sido inspeccionado y aprobado por la Inspección. Previa conformidad de la Inspección, el Contratista podr  suspender la marcha de los trabajos durante el período de licencia anual del personal, sin que por ello de lugar a ampliación del plazo contractual.

Artículo 53   -  MULTAS POR PARALIZACION DE LA OBRA 

Las multas que se apliquen por mora ya sea en la iniciación, la ejecución o en la terminación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondiente a aquellas. 

Solo se incluirán en el cómputo del plazo contractual, las prórrogas y ampliaciones concedidas.

* Mora en la iniciación de los Trabajos:

En la mora de iniciación de los trabajos se aplicará una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5 %) del monto contractual actualizado por cada día de mora.

Se debe tener presente que la Contratista no podrá iniciar la ejecución de los trabajos hasta no tener debidamente aprobado el Proyecto Ejecutivo total ó parcial de la Obra. 

Las demoras de esta aprobación atribuibles al Contratista no serán motivo del corrimiento de los plazos previstos.

Esta multa ser  descontada, una vez dictada la Ordenanza correspondiente del certificado a liquidar, que corresponde a la fecha de la Resolución.

Si la obra es terminada en el plazo establecido en el Plan de Trabajos aprobado, la multa por iniciación no será devuelta al Contratista.

* Mora en la ejecución de la obra:

Toda mora producida durante el período de ejecución de la obra en relación a los plazos estipulados en el Plan de Trabajos Aprobado, que no obedezca a casos fortuitos o de fuerza mayor, dará  lugar a la aplicación de una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5 %) del monto contractual actualizado por cada día de mora.

Cuando se hubiera aplicado multas por mora en la iniciación y/o durante la ejecución de la obra, la multa que corresponde por terminación no será  reducida en el monto de aquella que tendrá  siempre carácter sancionatorio. 

Si la obra se terminare en el plazo estipulado en el Plan de Trabajos Aprobado, la multa por mora durante la ejecución de la obra no ser  devuelta al Contratista.

*Mora en la terminación de los trabajos:

Si el Contratista no diere total o correcta terminación a todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulado para la realización de los mismos, incurrir  en una multa equivalente al uno por mil (1 %) del monto contractual actualizado por cada día de atraso en la terminación de los trabajos.

* Faltas e infracciones:

Si la Contratista cometiere más de tres (3) faltas o infracciones a este contrato, o a las órdenes escritas de la Inspección y Resoluciones de la Comitente, o por ausencia en obra del Representante Técnico, se hará  pasible a la imposición de multas que podr n variar de cinco décimos por mil  (0,5 %) al uno por mil      (1 %) del monto contractual actualizado según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Comitente y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros Artículos. 

Esas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción.

En caso de persistencia contumaz o de abiertos desacatos de la Contratista, las multas impuestas no serán óbice para que la autoridad competente imponga penalidades de carácter mas grave, pudiéndose llegar hasta la rescisión del contrato.

* Procedimiento para la aplicación de multas: 

Producido un caso de aplicación de multas la Inspección la comunicar  fund ndola por escrito al Secretario de Obras y Servicios Públicos.

Toda multa aplicada por Ordenanza Municipal, será  descontada del Certificado correspondiente al mes en que se dictó la Ordenanza.

La Ordenanza de la Comitente podrá ser recurrida por la Contratista en las formas y plazos previstos por las disposiciones legales sobre trámite administrativo.

Toda multa impuesta con carácter firme y definitivo, ser  hecha efectiva a juicio del Comitente por medio de nota de cargo, descontándole del primer Certificado de pago que se extiende a la Contratista y si el importe de éste no alcanzare a cubrirla, deberá  ser completada antes del retiro de dicho Certificado.

Si el total de los haberes a percibir por la Contratista no llegare a cubrir la multa o multas impuestas, aquél est  obligado a depositar el saldo dentro de los diez (10) días de notificado, en el Banco de la Provincia de Córdoba a la orden y en cuenta que fije la Comitente.

Artículo 54   -  CALIDAD  Y  CONTROL  DE  LOS  MATERIALES

Todos los materiales para la construcción de la obra serán nuevos y sin uso. 

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, serán  computados al Contratista como si  los hubiere  ejecutado  con  los materiales especificados,  sin derecho a reajuste de precios.

Los trabajos ejecutados, que no respondan satisfactoriamente a lo contratado, aunque fueran de mayor valor a lo estipulado, podrán ser rechazados y el Contratista deber  demoler y reconstruir de acuerdo al contrato, estando a su cargo los gastos provocados por esta causa, sin perjuicio de la sanción que correspondiere.

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para su uso, serán rechazados.

Todo material rechazado por la Inspección deber  ser retirado por el Contratista del sitio de la obra, dentro del plazo improrrogable que aquella fije.

El Contratista, a pedido de la Inspección, facilitar  los medios necesarios para la toma y transporte de muestras de materiales sin cargo alguno para la Municipalidad.

Durante el tiempo que duren los ensayos, no podrán usarse los materiales cuestionados y el mismo se mantendrá  fuera de la zona de las obras.

Artículo 55  -  COORDINACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA VIA PUBLICA

Una vez firmado el contrato de obra, se deberá coordinar la realización de la misma con la Inspección de la obra, a los efectos de su ajuste con obras o tareas proyectadas o en ejecución, por otros organismos nacionales, provinciales, o concesionarios, con el objeto de reducir al mínimo posible los inconvenientes a causar a la población que utilice la vía pública en la que se efectúan los trabajos.
Asimismo y como consecuencia de la mencionada coordinación, introducir  en el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones,  las modificaciones que se impongan, lo que deberá ser realizado juntamente con la adaptación de dicho plan a la fecha de iniciación y a los meses calendarios, tal como lo estipula el Artículo correspondiente al  "Plan de Trabajos y Curva de Inversiones".

Artículo 56   -  SEÑALIZACIONES

El Contratista deberá ejecutar la adecuada señalización de la obra en ejecución a fin de evitar accidentes, mediante la utilización obligatoria de letreros, balizas nocturnas y cintas de seguridad, a entera satisfacción de la Inspección y cumplir  con todas las Ordenanzas Municipales existentes al respecto.

Cuando sea necesario desviar el tránsito, el Contratista deberá  señalar eficazmente con todas las advertencias destinadas a orientar y guiar el tránsito hacia el desvío tanto de día como de noche, para lo cual en éste último caso serán obligatorias las señales luminosas que garanticen su permanencia durante toda la noche.

Ninguna de estas tareas recibir  pago adicional alguno, considerándose su precio incluido dentro de los Ítems de la Obra.

Artículo 57   -  DEPOSITO  DE  LOS  MATERIALES  DESTINADOS  A  LA  OBRA

El Contratista resguardará aquellos materiales que a juicio de la Inspección requieran estar al abrigo de los agentes climáticos.

Artículo 58   -  SISTEMAS  PATENTADOS

Si en la ejecución de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, debe presentar anticipadamente a la Inspección los permisos que la autoricen a emplear dichos sistemas o procedimientos, si así le fuera exigido.

El Contratista será el único responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Repartición por uso indebido de patentes.

Si el uso de un elemento o material de cualquier naturaleza, le fuera prohibido, deberá  de inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad.

Para garantizar la normal ejecución de las obras, el Contratista es responsable del resguardo de los materiales a usar, tanto en la protección ante agentes climáticos, como de la acción dañina de terceros o de animales.

Artículo 59   - TRABAJOS  Y  PROVISIONES  A  CARGO  DEL  CONTRATISTA

Son a cargo del Contratista todos los gastos relacionados con la ejecución, provisión de materiales, equipos, herramientas, mano de obra, insumos varios y todos los transportes que de lo enunciado se deriven, para dar cumplimiento al presente contrato de construcción.

Los Ítems serán construidos en forma completa, satisfaciendo los fines para los cuales fueron creados, debiéndose realizar cualquier provisión, trabajo o servicio que sin estar expresamente indicado, sea necesario ejecutar para lograr los nombrados objetivos, sin que sea reconocido ningún precio adicional, ya que todos los costos se consideran incluidos dentro del precio de contrato.

Artículo 60    -  GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS

Solo serán reconocidos al Contratista las erogaciones producidas por los daños en la obra, como consecuencia de casos fortuitos o fuerza mayor, en los términos previstos en el Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas Nº 8614. A tal fin deberá efectuarse el reclamo dentro de los quince (15) días hábiles de producido.

Cumplido este término no tendrá derecho a reclamación alguna.

En el caso de paralizaciones de obra ordenadas por el E.M.O.S.S., se reconocerán los costos producidos de acuerdo a lo estipulado en el Art. 42 de la Ley de Obras Públicas Nº 8614.

Artículo 61    -  PERSONAL DE LA RED PROVINCIAL DE EMPLEO

El Contratista se obliga a cumplimentar con los documentos exigidos previo a la firma del contrato con la declaración del porcentaje mínimo de trabajadores a tomar para la ejecución de la obra, inscriptos en la Red Provincial de Empleo.

Asimismo el Contratista deberá  contratar, como mínimo, el 50% (cincuenta %) de personal no especializado, que sea oriundo de la Localidad, para la ejecución de las obras  y Sector  al cual va dirigido este emprendimiento, quedando a criterio exclusivo del Comitente relevar de tal obligación al Contratista.

Artículo 62    -  APORTES  A  LA  CAJA  DE  PREVISION  Y  SEGURIDAD  SOCIAL  DE  LA  INGENIERIA,  ARQUITECTURA  Y  AGRIMENSURA  DE  LA  PROVINCIA  DE  CORDOBA  

El Contratista deberá realizar los aportes correspondientes a la Caja mencionada.

Artículo 63   -  FORMULARIOS Y PLANILLAS

Se adjuntan los modelos de formularios y planillas que pasan a formar parte del legajo para la contratación. Se respetará la diagramación propuesta y contendrán verazmente la información solicitada.

Modelo de Propuesta

Solicitud de Admisión

Planilla N° 1 (Equipos, Instrumental y Vehículos a afectar a esta obra)

Planilla N° 2 (Principales Obras Ejecutadas)

Planilla N° 3 (Obras en Ejecución y Adjudicadas para Ejecutar)

Planilla N° 4 (Profesionales y Personal Directivo)

Artículo 64   -  DOCUMENTACION QUE PERMANECERA EN OBRA

La Contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 45 de la Ley 8.614 de Obras Públicas - tercer párrafo -.

Como consecuencia de ello la documentación será  verificada por la Inspección de la obra y comprende lo siguiente:

1) Libro de Sueldos y Jornales Art. 52 Ley 20744.

2) Los recibos de liquidación de haberes debidamente firmados por el trabajador

3) Las pólizas o contrato de los seguros tomados para cubrir los riesgos al personal y a terceros, con los respectivos recibos oficiales de haber sido pagados.

4) Listado de personal actualizado expedido por la A.R.T.

5) Contrato de Seguro de Vida del Personal y recibos oficiales de pago

6) Las boletas de depósitos de los pagos de las obligaciones previsionales y sociales a la D.G.I.

7) Pagos a la UOCRA

8) Pagos al Instituto de Estadísticas Registro de la Industria de la Construcción (I.E.R.I.C.)

9) Depósitos correspondientes al Fondo de Desempleo

Artículo 65   -  PRORROGA POR MORA EN LOS PAGOS

A los efectos del  reconocimiento de la prórroga por mora en el pago de Certificados, previsto en el Art. 44 de la Ley de Obras Públicas Nº 8614, se contarán los días de mora a partir del vencimiento de pago del segundo Certificado.

En caso de que el monto de lo adeudado supere el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, se tomaran los días de mora como de prórroga, al 100%.

En caso de que lo adeudado fuera menor que el 10% mencionado, los días de prórroga se obtendrán multiplicando los días de mora por diez veces la relación entre el monto adeudado y el monto del Contrato. 

                     Días de Prórroga = Días de Mora x 10 x   Monto adeudado
                       Monto del Contrato  

Artículo 66  -  RESCICION DEL CONTRATO

	Serán de aplicación todas las disposiciones establecidas en los artículos 62 al 69, inclusive, de la ley de obras públicas provincial.

Artículo 67   -  PRECIO DE ADQUICISION DEL LEGAJO TECNICO

El precio de adquisición del Legajo Técnico para la licitación, ser  el establecido en el aviso público de la misma.

CAPILLA DEL MONTE, JULIO DE 2.004

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO
CAPILLA DEL MONTE
PROVINCIA DE CORDOBA

MODELO  DE  SOLICITUD DE ADMISION

LICITACION Nº.......
OBRA ....................

El (Los) abajo firmante (s) constituyendo, para todos los efectos, domicilio legal en........................................., de la localidad de Capilla del Monte, solicitan ser admitido/s en la licitación de la referencia, a efectuarse el día ....... del mes de .....  de 2.004, a las ....  horas.
A tal fin se acompaña toda la documentación que estipula el pliego de condiciones particulares.
Se declara conocer el lugar y las condiciones en que se realizar  la obra, como así también se manifiesta, con carácter de declaración jurada, que es de pleno conocimiento del Proponente todas y cada una  de las cl usulas integrantes de la documentación de la licitación, lo que implica su conformidad y aceptación de las mismas.
Por último, y con carácter de declaración jurada, se manifiesta que no promover  acción judicial alguna en caso de no ser adjudicatario de la obra.  

                                                  CAPILLA DEL MONTE, ..... de  ........................  de 2.004

.....................................................
.................................................
Firma del Director Técnico de  la/s
            Empresa /s o UTE                                                                       
Firma del (los) Representante(s)
 Legal (es) de la Empresa o UTE

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO
CAPILLA DEL MONTE
PROVINCIA DE CÓRDOBA

MODELO  DE  PROPUESTA

LICITACIÓN Nº..........

Proponente: 
 .....................................................................................................................................

Obra:  

....................................................................................................................................

El (Los) abajo firmante (s) constituyendo, para todos los efectos, domicilio legal en........................................., de la localidad de Capilla del Monte, OFRECEN tomar a su cargo la ejecución de las obras de referencia, en un todo de acuerdo al Pliego, por un monto total de $ .......................(Poner cantidad en letras y números)  , en el plazo de doscientos diez (210) días calendarios. 
La oferta se ha formulado con precios vigentes a la fecha de apertura de la licitación.

                                                  CAPILLA DEL MONTE, ..... de  ........................  de 2.004

.....................................................
.................................................
Firma del Director Técnico de  la/s
            Empresa /s o UTE                                                                       
Firma del (los) Representante(s)
 Legal (es) de la Empresa o UTE

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO
CAPILLA DEL MONTE
PROVINCIA DE CÓRDOBA

TABLA INDICATIVA DE LAS FRECUENCIAS MEDIAS DE DIAS DE LLUVIA

MESES

FRECUENCIA
ENERO
12
FEBRERO
8
MARZO
10
ABRIL
8
MAYO
6
JUNIO
4
JULIO
3
AGOSTO
2
SEPTIEMBRE
4
OCTUBRE
9
NOVIEMBRE
10
DICIEMBRE
11

Total =  87

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO
CAPILLA DEL MONTE
PROVINCIA DE CÓRDOBA

TABLA DE VALORES CORRESPONDIENTES A BANDA ADMISIBLE PARA CURVA DE INVERSIÓN

%        DE      INVERSIÓN
%   PLAZO
Curva  I'
Curva II"
Curva  I
DE   OBRA
0
0

0
2
7

10
8
19

20
17
33

30
29
48

40
40
63

50
52
77

60
65
86

70
79
93

80
92
98

90
100
100

100

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO
CAPILLA DEL MONTE
PROVINCIA DE CÓRDOBA

LICITACIÓN Nº ..........
OBRA: .........................................................................................................................

PLANILLA N° 1

PLANILLA DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL Y VEHÍCULOS A AFECTAR A ESTA OBRA

DESCRIPCIÓN
MODELO
POTENCIA
ESTADO
PROPIO O ALQUILADO
OBSERVACIONES

EMPRESA:

.....................................................
.................................................
Firma del Director Técnico de  la/s
            Empresa /s o UTE                                                                       
Firma del (los) Representante(s)
 Legal (es) de la Empresa o UTE

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO
CAPILLA DEL MONTE
PROVINCIA DE CÓRDOBA

LICITACIÓN Nº ..........
OBRA: .........................................................................................................................

PLANILLA N° 2

PLANILLA DE PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ AÑOS

OBRA
LUGAR
FECHA DE EJECUCION
DESCRIPCION DE LA OBRA

EMPRESA:

.....................................................
.................................................
Firma del Director Técnico de  la/s
            Empresa /s o UTE                                                                       
Firma del (los) Representante(s)
 Legal (es) de la Empresa o UTE

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO
CAPILLA DEL MONTE
PROVINCIA DE CÓRDOBA

LICITACIÓN Nº ..........
OBRA: .........................................................................................................................

PLANILLA N° 3

PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCION Y ADJUDICADAS PARA EJECUTAR

OBRA

LUGAR
FECHA DE INICIACION O ADJUDICACION

DESCRIPCION DE LA OBRA

EMPRESA:

.....................................................
.................................................
Firma del Director Técnico de  la/s
            Empresa /s o UTE                                                                       
Firma del (los) Representante(s)
 Legal (es) de la Empresa o UTE

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO
CAPILLA DEL MONTE
PROVINCIA DE CÓRDOBA

LICITACIÓN Nº ..........
OBRA: .........................................................................................................................

PLANILLA N° 4

PLANILLA DE PROFESIONALES
IDENTIFICAR AL PERSONAL DIRECTIVO DEL RESTANTE

APELLIDO Y NOMBRES

TÍTULO
ESPECIA-
LISTAS EN:
FUNCIÓN A DESEMPE-
ÑAR EN EL EQUIPO
MENCIONAR HASTA 3 TRABAJOS MAS IMPORTANTES
OTROS DATOS

HABILI.
POST-GRADO
ANTIG.

EMPRESA:

.....................................................
.................................................
Firma del Director Técnico de  la/s
            Empresa /s o UTE                                                                       
Firma del (los) Representante(s)
 Legal (es) de la Empresa o UTE